동 절 기 공 사 관 리 지 침

1. 개 요

동절기로 기온이 영하권으로 하강됨에 따라, 시설물의 동해에 의한 품질저하, 안전 사고요인 증가 등 부실시공과 안전사고를 사전에 예방하고자 일정기간동안 공사중지함을 원칙으로 하며, 공정관리상 부득이 공사를 속행할 경우에 다음의 공사관리지침을 참고하여 시행바람.

2. 공사 중지 기준 및 속행 절차

가. 중지 및 속행 기준

⑴ 1일 최저기온 : 4℃미만 일 경우 ; 물사용 공사 전면중지

⑵ 1일 최저기온 : 4℃이상, 1일 평균기온 0℃미만 일 경우 ; 물사용 공사 전면중지

⑶ 1일 최저기온 : 4℃이상, 1일 평균기온 0～4℃미만 일 경우 ; 부직포, 천막 및 비닐 등 보양, 보온 조치와 급열장치 본격 가동하여 속행

⑷ 1일 평균기온 4℃이상 일 경우 : 천막 및 비닐 등 보양 조치한 후 속행

나. 동절기 공사 속행시 검토·확인 서류

⑴ 시공계획서 검토요청서, 00동절기공사 속행계획서(별지양식 참조) : 현장여건에 따라 양식 등은 조정 후 시행 가능

⑵ 기상 예보 증명서

3. 동절기 현장 안전관리

가. 화재 예방

(1) 작업장내 모닥불 피우기 최대한 억제 - 특히, 주요구조물에 영향 없도록 조치

(2) 인화물질 인접부위에서는 일체 화기 금지

(3) 화재시 대비 소화기구 비치(현장사무실, 숙소, 하도급자 사무실, 인화물질 보관소 등)

(4) 정기적인 순찰 및 교육 실시로 화재 사전 예방

나. 작업장 관리

(1) 표면수 제거 - 결빙으로 빙판 방지 (미끄럼 방지용 모래 준비)

(2) 눈과 서리는 즉시 처리

(3) 인부 작업통로 미끄럼 방지 및 주기적인 순찰과 교육으로 사고예방 조치

4. 한중 콘크리트 공사관리

가. 적용 기준

⑴ 1일 평균기온이 4℃이하가 될 때는 한중 콘크리트 공사관리를 적용함.

⑵ 기온이 0℃～4℃에서는 간단한 주의와 보온으로 시공 할 수 있음.

⑶ 기온이 -3℃～0℃에서는 물 또는 물과 골재를 가열 사용하고 보온조치할 것.

⑷ 기온이 -3℃이하에서는 본격적인 한중 콘크리트로 시공할 것. 즉 물과 모래를 가열하여 콘크리트의 온도를 높이고, 적절한 보온과 급열로 소요온도를 유지할것.

나. 재료 관리

⑴ 시멘트

① 가능한 차갑지 않는 곳 저장

② 굳거나 동결된 시멘트는 사용 금지

③ 보통포틀랜드시멘트 사용을 표준으로 함

⑵ 골재 - 얼음, 눈의 혼입 및 동결된 골재는 사용금지, 필요시 골재를 가열(60℃이하로 간접가열)하여 사용

⑶ 물 - 필요시 물을 가열(60℃이하)하여 사용

⑷ 골재, 물 등 혼합물의 가열 온도는 40℃이하로 유지할 것(시멘트 급결 방지)

다. 배 합

⑴ AE제 또는, AE감수제를 반드시 사용할 것 (동결 피해 감소용)

⑵ 물시멘트비 60% 이하로 할 것 (초기 동해 감소)

⑶ 특수한 혼화제(고성능 감수제, 고성능 AE감수제, 방동제, 내한제)를 사용시는 품질이 확보된 것을 사용

⑷ 초기동해를 적게 하기위해 소요 워커빌리티가 얻어지는 범위 내에서 단위수량을 가능한 적게 할 것.

라. 타 설 (치기)

⑴ 타설시 콘크리트 온도 ; 10℃ ～ 20℃

⑵ 타설시간 ; 오전 9시 ～ 오후 5시 사이완료(특히 새벽 또는 야간 타설은 피할 것)

⑶ 타설시 온도 ; 기상조건, 운반시간 등을 고려하여 열량 손실을 가능한 줄이도록 해야하며 소요 콘크리트 온도가 얻어지도록 해야 함.

⑷ 타설 후 콘크리트 노출면 : 외기에 장시간 방치되지 않도록 해야 함.

⑸ 콘크리트펌프 사용 ; 수송관이 너무 냉각(수송 중 관내벽에 동결부착)되어 고장이 발생될 수 있으므로 관로의 보온, 온수 예열, 청소 등의 조치할 것(타설도중에 작업중단 금지)

마. 양 생

⑴ 양생방법 및 기간 ; 외기온도, 배합, 구조물의 종류와 크기 등을 고려하여 결정할 것. 콘크리트 타설 후 압축강도가 50㎏/㎠가 될 때까지 콘크리트 어느 부분에서도 온도가 0℃이하가 되지 않도록 해야함.

⑵ 타설 후 초기에 동결되지 않도록 잘 보온, 보양을 해야함. (특히 바람막이)

⑶ 콘크리트 타설시에도 열원을 가동하고, 타설완료시점부터 72시간 동안 열원에서 가장 멀리 설치된 자동온도계의 온도가 10℃이상 유지되도록 열원을 계속가동하고, 내부온도를 기록하여 보관토록 한다.

온도계(자동온도계 : 계속 온도변화 상태 자동 체크되는 것)는 열원에서 가장 먼 곳의 바닥 위 1m 높이로 설치할 것.

⑷ 공시체 3개를 별도 제작하여, 현장 여건과 동일하게 당해 슬래브 위에서 양생한 후, 콘크리트 강도 변화를 측정할 것.

⑸ 콘크리트 타설 후 양생온도 기준

구 분

타설 후 3일간

3～4일간

4～7일간

콘크리트 내부온도

10℃이상

5℃이상

0℃이상

콘크리트 외부온도

(바람막이내부온도)

10℃～20℃

5～10℃

양생포 덮기

5. 현장 공사 관리

가. 조적, 미장, 방수, 타일공사

⑴ 1일 평균기온 0℃～4℃인 경우 : 콘크리트공사에 준하는 보온 및 급열 조치후 공사실시

⑵ 1일 최저기온 0℃인 경우 : 작업중지

⑶ 시공시 작업장 실내온도가 7℃ 이상 유지되도록 보온재, 비닐시트 등으로 보온 조치할 것. 단, 방수용 코킹은 5℃ 이하에서 작업금지.

⑷ 작업완료후 48시간 동안 양생부위의 온도가 5℃ 이상유지 되도록 보온 및 급열조치 후 양생실시 (콘크리트 공사에 준하는 온도 관리)

⑸ 외기에 노출된 빙점이하의 골재는 가열하여 사용.

⑹ 시공 후 검사결과 동해를 입은 부위는 철거하고 재시공 할 것.

⑺ 타일공사의 줄눈시공은 경화가 불량해 질 우려가 있거나, 24시간이내 작업 부위가 외기에 노출되는 경우에는 PE필름으로 차단 보양할 것.

⑻ 줄눈부분 작업 완료 후, 청소용 물사용을 되도록 적게 하고 물사용 부분은 즉시, 마른헝겊으로 닦아 낼 것.

나. 토 공 사

⑴ 동절기 토공사 작업시 동해의 염려가 있는 경우, 다음사항의 동해대책을 강구하여 감리원의 승인을 받은 후 시공토록 할 것.

① 동상에 의한 부풀음 상태

② 동상을 입은 지반 위의 구조물 설치

③ 동결된 상태의 토사 되메우기

④ 굴착부의 법면 붕괴

⑵ 대기온도 0℃ 이하일 때는, 토사내의 간극수가 동결되므로 배수처리를 철저히 할 것.

⑶ 굴착과정에서는 신속한 배수처리로 동결되지 않도록 조치하고, 노면수의 유입방지 및 지하수위 저하를 위한 방법을 강구 할 것.

⑷ 동결된 지반위에 구조물 설치시에는, 사전 충분히 가열하여 해빙확인 후 설치할 것.

⑸ 되메우기 시, 동결된 상태의 토사와 얼음덩어리 유입은 절대로 사용하지 말 것.

⑹ 해빙기 굴착부의 법면 붕괴방지를 위해 법면구배를 완화시키도록 할 것.

(1 : 0.3이상)

다. 도장, 도배, 유리, 금속공사

⑴ 도장, 도배공사는 동절기 중 작업중지 원칙으로 함.

⑵ 실런트 작업시 작업장내의 온도를 4℃이상 유지시킬 것.

⑶ 용접시 외기온도 0℃이하에서는 작업중지를 원칙으로 함. 부득이 용접을 해야할 때는 용접부의 온도를 36℃이상 예열한 후 작업할 것.